일 반 시 방 서

1. 이 공사는 동작구민체육센터 주차장 재포장 공사건에 한정한다.

2. 공사장소 및 공사범위

가. 공사장소 : 동작구민체육센터 1층 주차장

나. 공사범위

공종명	세 부 내 용
철거공사	바닥타일철거, 카스토퍼 철거, 폐기물처리
포장공사	아스팔트포장(#78/표층용) / 포장면적(14.96a)
부대공사	도로표지병설치, 카스토퍼설치, 차선도색

3. 공사는 시방서에 의하여 발주일로부터 30일이내 준공하여야 한다.     (단, 공사일정은 동작구민체육센터의 사정상 변경될 수 있으며, 주말(토,일) 및 휴일을 이용하여 시행한다.)

4. 공사업체는 작업계획서를 공사착수 전 제출하고 감독자의 승인을 받아 작업을 시행한다.

5. 기한 내에 공사를 완성하지 못한 때에는 지체일수 1일에 대하여 계약금액의 1/1000에 상당하는 지체상금을 대가청구 전까지 현금으로 납부 하여야 한다.

6. 본 공사 준공검사일로부터 1년간 하자담보 책임을 진다.

7. 동작구민체육센터의 사정에 의하여 일시 중지하거나, 작업사항이 변경 되어도 이의 없이 이에 따르기로 한다.

8. 본 공사에 사용되는 모든 자재는 국가검정합격품(KS규격품)을 사용하여야 한다.

9. 공사는 감독자의 감독 하에 시행해야하며 공사물품(자재)은 공사전에 입고하고, 입고 시 감독자의 확인을 받아 합격된 물품만 반입 사용한다.

10. 공사시 시방서를 준수하고 내용이 상이하거나 명시되지 않은 사항이 있을 경우에는 감독자와 협의하여 공사하여야 한다.

11. 공사 시 기존 시설물 손상 및 업무에 방해가 되는 시공 방법은 하여서는 안 된다.

12. 공사 중 부주의로 발생하는 모든 사고에 대하여 공사업체가 책임을 져야하며, 이를 방지하기 위해 공사업체는 사고방지 방안을 강구해야 한다.

13. 공사 시 기존 시설물이 손상된 경우에는 공사업체의 책임으로 즉시원상 복구한다.

14. 감독자와 공사업체의 내용이 상이할 때에는 감독자가 우선한다.

15. 공사 시 발생한 모든 폐기물은 즉시 반출 처리하여야 한다.

16. 공사 전 안전교육을 실시하여 안전사고를 미연에 방지하여야 한다.

17. 공사업체는 공사 전 관련공사 기술을 보유한자를 선정하여 감독자의 승인을 득한 후 공사감독을 하도록 한다.

18. 준공계 제출 시 공사과정(공사 전, 중, 후) 사진 2부를 제출한다.  끝.

포 장 평 면 도