흑석체육센터 수영장 천장공사 시방서

목   차

□ 공 사 현 황 -----------------------------  01

□ 일 반 시 방 서

제1장 공 사 일 반 ---------------------  02

제2장 천 장 공 사 ---------------------  09

제3장 철 거 공 사 ---------------------  11

공 사 현 황

1. 공 사 명 : 흑석체육센터 수영장 천장재 교체공사

2. 주    소 : 서울시 동작구 현충로 73(흑석체육센터)

3. 공사장소 : 지하1층 수영장

4. 공사목적 : 수영장 내외부 천장재, 지지대의 부식 및 노후화로     안전사고 발생의 위험이 있고, 미관을 헤쳐 안전사고 예방과 쾌

적한 운동환경을 위하여 천장재 교체공사를 시행함.

5. 공사범위 및 사양

구 분	공 사 내 역 --
수영장 천장재 교체공사	❍ 공사면적 = 510㎡
	❍ 수영장 천장재 신설공사 - 천장재 시공방법 : M-BAR TYPE 시공 - SMC판넬 규격 : 600*600*2.0T - SMC M-BAR TYPE 설치용 부자재 일체
	❍ 수영장 천장재(SMC판넬) 철거공사 - 천장 내외부 천장재, 천장재 설치용 부자재 일체 (단. 공기조화설비 덕트 제외)
	❍ 공기조화설비 급배기 디퓨져 교체공사(자바라 포함) - 공기조화설비 덕트에 연결되는 자바라 지점~디퓨져 까지 교체 - 디퓨져(원형) 교체수량 1. SUPPLY AIR SIZE : 250∅*15개(단열용 자바라 교체 포함 2. RETURN AIR SIZE : 300∅*15개(자바라 포함)
	❍ 폐기물 반출 - 수영장 천장재 신설 및 철거공사로 발생된 폐기물 반출
	❍ 준공 및 청소 - 공사 완료 후 준공청소 실시

6. 공사 소요기간 : 6일

- 공사기간 : 2014.5.04(일)~2014.5.09(금)(준공청소 포함)

일반시방서

제 1 장   공사일반

1. 정의

1. 적용범위

가. 본 시방서는 동작구시설관리공단 흑석체육센터 수영장 천장공사에 적용한다.

나. 본 시방서에 포함되지 아니한 사항 중 특이한 사항에 대하여는 감독관과

협의하여 승인을 득하고, 일반적인 사항은 건설부 제정 표준시방서에 따른다.     다. 공사는 시공 전 공정계획표,  시공방법 등에 관한 사항을 제출하여 감독관

의 승인을 받는다.

라. 공사자재는 반입 시 감독관이 검수 후 합격한 제품만 사용하고, 불합격제

품은 즉시 반출한다.

2. 공사 관련규정(법규)

가. 공사 관련규정은 K.S 기준에 준한다.

나. K.S 기준에 없는 사항은 국내관련 법규에 적합해야 한다.

3. 용어의 정의

가. 감독관(현장 감독자)

1) 이 시방서에서 감독자라 함은 보수공사를 담당하는 발주자가 감독관으로

임명한자를 말한다.

2) 감독관이 시공자에 대하여 행하는 지시, 승인 및 확인 등의 업무처리는

서면으로 한다.(단. 계약 내용의 변경을 수반하지 않는 시정 및 이행 촉구

등의 단순한 지시는 구두로 할 수도 있다.

나. 시공자(공사도급 계약자)

1) 본 시방서에서 시공자라 함은 공사도급 계약서에 기재되어 있는 계약자

또는 그 대리자와 그들이 위임하는 현장 대리인, 시공기사를 말한다.

2) 시공자는 공사 전체를 제3자에게 하청을 줄 수 없다.

3) 시공자가 제3자에게 공사 전체를 하청을 준 경우, 발주자는 일방적으로 계

약을 파기할 수 있으며, 계약자는 이에 대해 이의 제기를 못한다.

또한, 기 시공된 공사의 공사비 및 철거 비용은 시공자가 배상해야 한다.

다. 현장 대리인

1) 시공자는 건설기술자의 현장배치 기준에 준하여 현장에 상주시켜야 한다.

2) 현장 대리인 및 공사 기술자는 공사 및 기타사항 일체에 대하여 시공자           (계약자)의 책임과 의무를 대행하는 것으로 본다.

라. 하도급자

1) 시공자가 공사의 일부를 제3자에게 하도급 하고자 하는 경우에는 해당공

사 발주 전에 감독자의 승인을 받아야 한다.

2) 시공자는 하도급 승인 신청 시 하도급 업자의 도급 한도액, 공사실적,

자본금, 보유인력 등을 증명하는 자료를 첨부해야 한다.

3) 하도급 업자는 해당공사를 제3자에게 재하청 줄 수 없다.

4) 하도급 업자가 제3자에게 재하청을 준 경우, 발주자는 일방적으로 계약을

파기할 수 있으며, 계약자는 이에 대해 이의 제기를 못한다.

또한, 기 시공된 공사의 공사비 및 철거 비용은 시공자가 배상해야 한다.

1.2 이해 및 분쟁 해석

가. 시공자는 다음과 같은 사항에 대해 이의가 생긴 경우에는 신속히 감독관에게

통지하고 그 처리방법에 대해 협의하여 결정한다.

감독관에게 사전에 문서로 통지하지 않고 시공 완료한 경우에는 임의시공

으로 간주한다.

1) 설계도면과 시방서의 내용이 상이하거나 관련공사와 부합되지 아니할 때

2) 설계도서에 누락, 오류 등의 모순점이 있을 경우

3) 관련 설계도서 간의 내용이 다르거나 명기가 없을 때

4) 시방서 내용에 의문이 생긴 경우나 설계도서와 공사현장의 사정이 상이한 경우

5) 예상하지 못한 특별한 사정이 생겨 설계도서의 조건을 만족시킬 수 없는 경우

나. 도면 및 시방서, 도급계약 내역서 등의 설계도서에 누락된 사항일지라도

계약 목적을 달성하기 위하여 구조상, 기능상, 외관상 당연히 시공해야 할

사항은 계약금액에 변경 없이 시공하여야 한다.

다. 시공자는 감독관의 지시 혹은 결정에 이의가 있을 경우에는 서면으로 3일

이내에 감독자에게 제출해야 하며, 그 기간 내에 감독자에게 제출하지 않을

경우에는 지시 등이 확정된 것으로 한다.

라. 공사 중 발생하는 주요 지시 및 결정 사항은 문서를 통해 하는 것을 원칙        으로하며 구두에 의한 것은 효력을 발생하지 않는다.

2. 어구의 해석

가. 계약서 및 설계도서상의 어구해석에 이견이 발생하는 경우에는 감독자 및

발주자의 해석이 우선한다.

3. 분 쟁

가. 계약서 및 설계도서에 별도로 규정된 사항 이외에 발생하는 문제에 대한          분쟁은 감독관과 협의하여 해결하며, 협의가 성립되지 않을 경우에는 관계       법령의 규정에 따른다.

1.3 공사 중지

1. 감독관은 다음과 같은 경우에 공사의 일부 또는 전부를 중지시킬 수 있다.

가. 시공자가 과업지시서 및 시방서 내용과 다르게 시공을 하거나 감독관의 지        시에 응하지 아니 할 때

나. 공사 시 시공자의 기술 미숙으로 부실공사가 우려될 때

다. 공사 시 시공자의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

라. 특별한 사유 없이 공기를 지연시키거나 공사와 관련한 기관 등의 명령 및        시정 등을 위반할 때

마. 기타 기후 및 천재지변 등으로 인하여 부실 공사가 우려될 때

1.4 공사기간

1. 공사 완료시점은 실제공사의 완료일로 본다.

2. 시공자는 발주자의 부득이한 사정 등으로 공사의 계속적인 시행이 불가능하      다고 계약자가 판단하여 공사의 중지를 서면으로 요청한 기간 외에는 공사기      간의 연장을 요구할 수 없다.

3. 아래와 같은 사유가 발생했을 때에는 계약자(감독관)의 판단에 따라 공사기       간을 연장할 수 있다.

- 천재지변 또는 이에 준하는 사정에 의하여 공사가 중단되었을 때

1.5 작업 시간

1. 공사 시 작업시간을 연장 또는 단축,  야간 또는 휴일 작업을 감독관이 요청       할 경우 시공자는 이에 응하여야 한다.

1.6 공정 계획

1. 공정표 및 시공계획서

가. 시공자는 공사착수 전에 공사 전반에 대한 공정표를 작성하여 감독자의 승        인을 받아야 한다.

나. 공정표에는 각 공사와 각 재료의 반입시기 및 공사기간 등을 반영 작성하

고 자재의 수량, 공사 기술자 수를 기입해야 한다.

2. 공사자재 승인

가. 공자자재 승인 요청

1) 시공자는 각 공사 전 해당 공사에 사용될 자재에 대한 자재 승인요청을               감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

2) 공사자재 승인 요청서에는 제조업자시방서, 시험 성적서(시험항목 : 석         면함유 여부, 가스유해성 시험 포함), 표준 색상철, 카탈로그, 계산서, 자재        유지관리 지침서 등의 관련서류를 첨부해야 한다.

3. 공사 사진

가. 공정별로 정리된 사진첩 2부를 100mm정도 크기의 컬러사진으로 촬영하고

인화하여 제출하며, 공종별 사진설명, 촬영일자, 간단한 설명 등을 기재하여

공사 완료 후(준공) 제출 한다.

나. 공사 사진의 촬영 개소는 다음과 같다

1) 착공전의 현황

2) 공사 중 은폐되는 장소

3) 공사 진전을 나타내는 장소

4) 중요한 구조부분

5) 기타 감독관이 요구하는 촬영 장소

다. 준공도 요구 시 제출

1) 시공자는 계약자(감독관)의 요구 시 공사 중 발생되는 경미한 부분의 변

경까지 포함한 준공도를 작성하여 준공서류 제출 시 감독관에게 제출한다.

2) 준공도 작성 시 규격은 A3로 한다.

3) 준공도 작성에 필요한 경비는 시공자 부담으로 한다.

1.7 현장 사용제한

1. 자재 및 장비 반입 계획

가. 자재 및 장비에 반입에 대한 전반적인 계획을 세워 감독관의 승인을 받는다.

나. 보양 및 원상복구

공사 중 수영장 타일, 시설물 등에 손상이 되지 않도록 보양 조치를 한 후

깨끗이 지속적으로 유지 관리한다.

다. 관공서 기타에의 수속

공사 준공 처리를 포함한 모든 소정의 인허가 수속은 감독관과 협의하여         공정에 맞도록 처리하며, 이에 소요되는 비용은 시공자 부담으로 한다.

라. 특허권 사용

본 공사에 특허권을 사용하는 경우에는 모든 사항을 시공자가 책임을 지고        처리한다.

1.8 자 재(재료)

1. 자재(재료) 승인

시공자는 공사착수 전 감독관에게 공사전반에 걸쳐 사용될 재료에 대한 공정       계획에 부합되는 자재(재료)를 검수(승인) 받아야 한다.

2. 재료 일반

가. 공사용 자재 및 시설물은 K.S 규격에 합격한 신품을 사용하되. 부득이한 경        우에는 감독자가 인정하는 동등 이상의 품질의 것을 사용한다.

나. 재료의 품질이 명시되지 아니한 경우에는, 다른 재료와 균형이 맞는 품질        의 것으로 하고 감독관의 승인을 받아 사용한다.

3. 자재의 승인 및 견본품

가. 시공자는 자재(재료)승인 계획서에 의하여 사전에 재료의 색상, 마무리 정도,

규격을 정할 수 있는 견본품과 제조회사의 카탈로그, 재질 및 품질을 보장        할 수 있는 한국건설생활환경시험연구원 등에서 발행된 시험성적서를 요청        시에 감독관에게 자료 제출을 하며,

자재(재료)승인 지연에 따른 계약기간의 조정은 인정하지 아니한다.

나. 감독자의 승인을 받은 견본품은 2개 이상 준비하여 공사완료 시까지 감독        관 사무실에 보관 하도록 한다.

4. 자재(재료)의 반입

가. 자재(재료)는 반입 때마다 사전에 감독관에게 통보 및 승인을 받는다.

나. 자재의 반입 시에는 자재가 설계도서상의 조건에 적합한지를 확인하고, 필        요에 따라 증명 자료를 첨부하여 감독자에게 문서로 보고한다.

다만, 경미한 자재(재료)에 대해서는 감독관의 승인을 득한 후 문서보고를

생략 할 수 있다.

다. 불합격 제품은 신속히 공사현장 밖으로 반출(출고)한다.

라. 재료의 손상 품질저하, 도난 등의 분실, 위험 및 가연성이 있는 재료는 제        조업체 시방서에 따라 운반 저장 및 취급하여야 한다.

5. 대체 재료

가. 반입되는 자재(재료) 중 K.S규격품이 없는 경우에 명시된 재료를 다른 재료        로 대체해야 할 경우, 감독관의 승인을 받아 사용한다.

1.9 품질 및 공사장 관리

1. 품질관리

가. 현장에 반입된 모든 재료는 감독자의 검사를 받아 합격한 것을 사용한다.

다만, K.S 규격품은 검사를 생략할 수도 있다.

나. 품질관리 또는 검사가 필요한 것은 현장에서 품질관리 시험을 한다.

다. 검사 또는 시험은 K.S규정을 표준으로 하고, 그 규정이 제정되지 않은 것         이나 설계도서에 정해지지 않은 재료의 시험은 감독관의 지시에 따른다.          이들에 대한 모든 비용은 시공자 부담으로 한다.

라. 검사 및 시험완료 후 합격된 반입자재(물품)는 지정장소에 보관하며, 불합         격된것은 즉시 반출하고, 신속히 합격품을 납품하여 공사에 지장이 없도록         한다.

또한, 검사 및 시험에 합격한 자재(재료)라도 사용할 때 변질 또는 손상          되어 불량품으로 인정되었을 때는 이를 사용해서는 안 된다.

2. 공사장 안전관리

공사장 안전관리를 철저히 지키도록 하고, 근로안전 관리규정, 보건관리규정,       산재보험법 및 기타 관계 법규에 따라 빠짐없이 시행하고 다음 사항을 지킨다.

가. 노무자 기타 출입 감시, 풍기 및 위생단속

나. 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치 표시, 기타 사고 방지에 대한 단속

다. 인접건물, 시설물 및 수목 기타의 손상에 대한 보호시설

라. 시공재료 및 시공설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소

마. 공사장 주변 보안조치, 현장 인원의 안전장비, 재해예방 시설 및 유사시           대책 마련 등

3. 소음 방지

시공자는 공사 시행에 있어서 관계법령을 준수하고, 상시 시공에 의한 소음으      로 공사 중에 피해가 없도록 한다.

4. 보안

가. 공사용 전기설비에 사용하는 전선, 전구류 등은 K.S규격품으로 전압용량에         적합한 규격품을 사용하여 누전, 기타의 위험을 방지해야 한다.

나. 공사용 재료는 노상에 방치하지 못하며, 부득이 노상에 적치할 때에는 감         독관과 협의하여 승인을 받고 교통에 지장이 없도록 정리 정돈해야 한다.

5. 가공선 및 매설물

공사의 시공에 지장이 있는 가공선 및 매설물 처리에는 공정에 지장이 없도      록 사전에 처리방법 등을 감독관과 협의하여 지시를 받아야 한다.

또한 시공 중에 가공선, 매설물 등이 손상되지 않도록 보양하여야 한다.

6. 시공자 부담

가. 본 공사의 시공에서 다음 각 항에 필요한 비용은 도급자가 부담한다.

1) 공사 시방서, 과업지지서, 도면 등에 명기 되지 않은 사항이라도 공사 시           행의 구조상, 기능상 미관상 당연히 필요한 사항에 소요되는 비용

2) 공사 시공도에 따라 시공되는 공사에서 현장의 사정에 따라 감독자가            지시하는 보완 또는 필요한 시설 중 국부적인 부분에 대하여 발생되는 비용

3) 도급자가 부담하는 재료, 기계기구 등의 시험 및 제검사와 설치, 시공

4) 경미한 변경 및 보완

5) 공사용 기계, 기구자재 등의 운반으로 시설물이 손상되었을 때 보수비용

6) 시방서, 도면에 명시되지 않은 공사에서 시공상 필요로 하는 설계, 각종

계산 및 기타의 자료 작성

7) 기타 본 시방서에서 시공자 부담으로 명기한 부분

1.10 공사의 준공 및 인수인계

사용검사(준공)

시공자는 관련서류를 첨부하여 사용검사(준공검사)를 신청해야 한다.

1.11 하자 보수

가. 공사 준공 후 계약서상에 명기되어 있는 하자보수 기간 내에 발생한 하자        는 시공자 부담으로 즉시 재시공 또는 보수하여야 하며, 이를 신속하게 처

리하지 아니 할 경우 감독관은 타 업체로 하여금 재시공이나 보수를 시킬        수 있으며, 이에 따른 제반 발생비용은 하자보수 보증금에서 공제할 수 있다.

나. 하자보수기간은 해당 하자보수 공사완료 때까지 자동 연장되는 것으로 한다.

제 2 장   천 장  공 사

2.1 일반 사항

1. 자재(재료)

내.외장 자재(재료)는 미리 견본품을 제출하여 재질, 형상, 칫수, 색깔 및 마       무리 등에 대한 감독관의 승인을 얻는다.

자재(재료)의 품질은 한국공업규격, 또는 이와 동등이상으로 감독관이 인정       하는 자재(재료)를 사용하고 불연재료, 준불연재료, 난연재료 등 건설부 장관       이 인정한 것으로 한다.

2. 운반 및 보관

내외장재의 운반 및 현장 반입 후의 보관에 있어서 특히 구석, 모서리 및 표       면의 오손방지에 유의하고 건조한 곳에 정돈하여 보관하며, 파손된 재료는        즉시 반출하여 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다.

3. 기준선의 선정

시공에 앞서 마무리면의 기준선을 설정하고, 감독관의 승인을 받는다.

붙여나가는 방법은 특별한 명기가 없는 한 유아풀쪽에서 시작하여 성인풀쪽       으로 붙여나간다.

※ 단. 기존에 설치된 유아풀과 성인풀 경계면에 재료분리“턱”을 설치하여 유

아풀 또는 성인풀 천장에서 발생되는 물이 차단되도록 한다.

4. 보양 및 청소

시공 전에 보양을 시행하며, 공사범위에는 파손 및 오손 방지를 위해 합판재       (9T이상)로 보양하며 공사에서 제외된 유아풀도 보양하여 파손 및 오손을 방       지하여야 한다.

보양완료 후에는 감독관의 승인을 받고 다음 공정을 진행한다.

시공 완 후에는 보양재를 제거하고, 준공청소를 한다.

2.2 열경화성수지천장판(SMC)

1. 열경화성수지천장판은 KSA(한국표준협회 인증) 인증한 제품을 사용하여야 한다.

2. 열경화성수지천장판은 엠바(M-BAR TYPE) 타입으로 시공한다.

3. 열경화성수지천정판(M-BAR TYPE)을 시공하기 전에 설치도를 완성한 후 중심선

을 확정하고 천정에 취부되는 모든 기구의 배치를 하여야 한다.

4. 모든 부자재는 아연 도금된 자재를 사용하여야 한다. (단, 볼트는 녹막이 페

인트도 가능함.)

5. 엠바(M-BAR)를 시공할 시에는 천정판넬(600*600) 적한한 넓이로 시공한다..

6. 캐링 찬넬을 시공할 시에는 캐링 찬넬 간의 간격은 0.9M를 초과할 수 없다.

7. 행거볼트는 행거볼트 인서트를 설치하고 행거볼트를 부착하며 행거볼트 간의       간격은 0.9M를 초과할 수 없다.

8. 벽에 설치되는 타일몰딩과 캐링 찬넬의 간격은 0.5M~0.7M 사이를 유지하고,       타일몰딩과 행거볼트 간격 또한 0.5M~0.7M 사이를 유지하여야 한다.

9. 열경화성수지천정판(M-BAR TYPE)의 마감부분은 정교하게 시공되어야 하며        특히 천정판이 위로 들리지 않도록 고정시켜야 한다.

10. 열경화성수지천정판(M-BAR TYPE)을 시공할 시에는 감독관의 검수를 마친 완       전한 판넬(정품)만을 시공한다.

11. 열경화성수지천정판(M-BAR TYPE)을 시공할 때에는 판과 판 사이가 뜨지 않       고 수평이 맞도록 시공하여야 한다.

12. 열경화성수지천정판(M-BAR TYPE)을 엠바에 고정 시 나사못(스텐)으로 고정하고

캡을 씌워 마감한다.

13. 열경화성수지천정판(M-BAR TYPE)에는 전기구, 환기구 등 모든 기구를 직접

취부 할 수 없으며 별도(보강)공사를 하여 취부 하여야 한다.

※ 공기조화설비용 디퓨져 설치 시 별도 행거를 설치하여 고정하여야 한다.

14. 본 시방서에 없는 사항은 일반 건축공사 표준 시방서에 준한다.

2.3 디퓨져(원형)

1. 열경화성수지천장판은 KSA(한국표준협회 인증) 인증한 제품을 사용하여야 한다.

2. 디퓨져 설치 시 별도 행거볼트를 설치하여 고정하며 천장판넬(SMC)고정하지

아니한다.

3. 디퓨져(원형)는 분체도장한 제품 동등 이상의 제품을 사용한다.

4. 모든 부자재는 아연 도금된 자재를 사용하여야 한다. (단, 볼트는 녹막이 페

인트도 가능함.)

5. 행거볼트는 행거볼트 인서트를 설치하고 행거볼트를 부착하며 디퓨져 1개에

행거볼트 2개 이상 설치한다.

제 3 장   철 거  공 사

3.1 일반 사항

1. 철거공사는 아래의 항목에 대한 부분적 철거나 보호 또는 철거 후의 처리 등에

관하여 적용한다.

적용범위는 첨부된 도면이 지정하는 범위 및 그 외의 부분철거에 준하여 적        용한다.

2. 제출물

가. 부분적인 철거작업과 여타작업과의 연계 공정표를 작성하여 철거 작업착수         전에 감독관의 승인을 받아야 한다.

나. 연계공정표에는 철거시의 안전에 대한 조치 등이 포함되어 있어야 하며,          먼지나 소음 발생의 억제를 위한 상세한 보호조치가 명시되어야 한다.

다. 공정은 상세하게 작성하여 해체되지 않는 부분의 보호 및 구조적 안전조치         등이 명시되어야 한다.

라. 건축물의 철거 전 외부와 내부의 상태를 보여주는 사진을 제출하며, 철거        작업 으로 인하여 손괴로 오인될 수 있는 인접부위에 대한 사진도 포함한다.

특히 철거 시 주요부분 입면, 단면의 도면화 및 사진으로 제출하여야 한다.

3.2 작업 조건

가. 철거작업은 주변의 정상적인 활동에 대한 방해를 최소화할 수 있도록 하여야 한다.

나. 철거 시 시설물의 손괴 방지를 위한 보강시설은 시공자가 공정에 따라서 구조

물로부터 제거할 수 있고 제거된 손괴 방지물은 제거와 동시에 현장에서         반출되어야 하며, 현장 내에 이를 보관하거나 매각처리를 하여서는 안 된다.

다. 철거될 구조물이나 존치될 구조물 등에는 내외부에 동바리, 가새 등을 설         치하여 구조물이 움직이거나 침하 또는 붕괴 등이 일어나지 않도록 하여         야 한다.

라. 존치되는 부위는 철거공사로 인해 손상을 입지 않도록 필요한 보호 조치를        하여야 한다.

마. 공사가 종료되면 모든 보호조치용 보양물품을 철거하며, 반출폐기 하여야 한다.

바. 철거 작업이나 이로 인해 발생한 쓰레기의 처리(적재 시) 감독관의 승인          없이는 임의로 통로, 보행로 등을 폐쇄하거나 통행을 방해하여서는 안 된다.

사. 철거 작업 중 산소용접기 등으로 절단작업을 할 경우에는 절단작업 전에         작업장 내의 모든 가연성 물질을 제거하여야 한다.

아. 철거작업을 하는 동안에는 화재 예방을 위한 조치를 반드시 하여야 한다.

자. 철거작업 시에는 먼지날림 등을 방지하기 위하여 가설 막 등을 설치한다.

3.3 해체 및 철거

가. 철거될 구조물이나 존치될 구조물 등에는 내외부에 동바리, 가새 등을 설치하여

구조물이 움직이거나 침하 또는 붕괴 등이 일어나지 않도록 하여야 한다.

나. 철거작업 중 구조물의 안전에 이상이 있을 때에는 즉시 작업을 중지하고 이를

감독관에게 즉시 통보하여야 하며, 작업의 계속여부가 결정될 때까지는 구조물

을 지지하기 위하여 조치를 하여야 한다.

다. 철거(해체)로 발생된 폐기물은 신속히 제거하여 건축물을 지지하는 벽이나        바닥 또는 구조체에 과도한 하중이 가해지지 않도록 하여야 한다.

라. 철거공사 중에 당해 건축물의 기능이나 설계와 크게 배치되는 예기치 못했던

구조적 장애물이 발생했을 때는 장애물의 범위 등을 조사하여 필요한 조치        를 하여야 하며, 감독관에게 신속히 보고하여 승인을 득 한 후 공사를 진행하        여야 한다.

4.4 보강 자재 및 발생물품 회수

가. 현장 내에서 철거작업 등으로 발생한 폐기물, 쓰레기 등은 현장에서 신속히 반

출하며, 관계규정에 적합하게 처리하여야 한다.

나. 철거작업 중에 유해물질이 발생하게 되면 관계규정에 따라 적법하게 회수하여

처리하거나 공해의 유발요인이 되지 않도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

다. 공사 중 발생되는 폐기물 등의 물품 등의 소각은 현장 내에서는 허용되지 않는다.

라. 철거 작업이 끝나면, 철거 장비와 공사용 설비 등을 현장에서 회수해야 한다.

마. 각종설비 등에 대한 임시 보호용 시설을 회수하고, 내부는 깨끗이 청소하여야 한다.

바. 철거가 과도하게 이루어진 곳은 즉시 보수하여야 한다.